지하주차장 공조배관 이설공사 설명서

2008. 04

청 주 우 편 집 중 국

공 사 설 명 서

1. 목적

지하 주차장에 위치한 소포작업장으로 출입하는 차량이 천정의 배관이 다소 낮은 관계로 적재함에 닿아 통행에 지장이 있는 관계로 이를 개선하여 차량의 출입을 원활히 하고자 함.

2. 현황

가. 공사명 : 지하 주차장 공조배관 이설공사

나. 공사기간 : 공사 계약일로부터 20일

다. 공사범위

1) 스파이럴 공조배관 철거 및 이설

2) 설비배관 앵글 지지대 이설(2개소)

3) 출입구에 설비보호를 위한 앵글설치(1개소)

4) 기타사항 : 설명서 및 도면 참조

제1장 일반사항

1. 본 공사설명서는 청주우편집중국 지하층 주차장설비에 적용하며 관계법령 또는 별도로 정한 규정에 따른 사항을 제외하고는 본 설명서에 준하여 시공한다.

2. 계약자는 계약체결 후 공사전반에 대하여 충분한 조사와 검토를 행한 후 다음 사항에 대하여 감독공무원의 협의를 받은 후 본 공사를 시행한다.

가. 공사공정표

나. 기타 제작도면 및 공사방법

3. 공사기간중 현장책임자는 작업전과 종료후 작업내용을 감독공무원에게 보고한다.

4. 계약자는 시공시 기존 설비나 시설물에 손상을 입혔을 때는 원상복구 후 작업에 임하여야 한다.

5. 계약자는 공사전과 공사후 사진를 제출하여야 한다.

6. 본 공사는 우리국 근무자 또는 작업자에게 업무에 지장을 주지 않도록 감독공무원과 사전에 충분히 협의한 후 시공한다.

7. 시공 및 철거시 작업장는 정리정돈을 철저히 하고 작업중 발생한 쓰레기와 폐기물은 시공사가 처리한다.

8. 본 공사에 사용하는 자재는 KS규격 및 동등이상의 제품으로 사용하고, 사용전에 반드시 감독공무원의 검사를 받고 불합격품은 즉시 현장외로 반출하여야 한다.

9. 본 공사에 관계하는 인원의 출입은 우리국의 통제에 따르고 인적사항(성명, 전화번호 등)요구사항이 있으면 관련사항을 서면으로 제출한다.

10. 공사완료후 감독공무원의 감독하에 시운전에 합격하여야 시운전기간은공사기간에 포함한다.

제2장 안전사항

1. 안전관리 소홀로 발생되는 안전사고는 계약자가 책임지며, 화재의 위험이 있는 곳 또는 용접기를 사용시는 반드시 소화기를 비치한다.

2. 계약자는 안전관리책임자를 지정 또는 선임하고 시공 개시부터 완료까지 작업장 내의 안전상태를 수시로 점검하여 안전사고를 방지한다.

3. 계약자는 인사사고 또는 기타 안전사고에 대하여 계약자 부담으로 민,형사상 책임을 진다.

4. 기타 안전사고 발생 요인이 발생하여 감독공무원이 지시할 경우 반드시 조치하여야 하며 또한 안전사고에 유의하여 시공을 하여야 한다.

제3장 특기사항

1. 목 적

본 공사는 지하 주차장 천정에 설비되어 있는 공조배관 및 일부 설비배관 지지물을 이설하여 바닥면에서 최소한 2.5M이상의 높이가 확보되도록 하여 공사목적에 만족하여야 한다.

2. 스파이럴 공조배관 이설 및 철거

가. 이설되는 공조배관은 바닥면에서 최소한 2.5M 이상의 높이가 되도록 이설한다

(도면 참조).

나. 스파이럴 배관을 이설시 굴곡되는 부분은 엘보로 시공하고, 배관의 굵기가 다른

이음부분은 레듀셔를 사용하여 시공한다.

다. 스파이럴 공조배관의 철거는 도면에 의거하여 철거하며, 천정의 지지 행거 또한    모두 철거한다.

라. 철거한 배관은 지하 주차장의 지정장소에 보관토록 한다.

3. 설비배관 앵글 지지대 이설

가. 관련 사진에 명시된 2개소의 앵글 지지대(75*75)는 양측 건물보측으로 이설하      며, 앵글의 지지는 앵커볼트로 견고히 조임하여 부착한다.

나. 설비의 보온은 기존의 것과 같은 재질에 같은 방법으로 한다.

4. 출입구 설비보호 앵글설치

가. 차량이 출입하는 지하 주차장 진입로 측의 입구 천정에 차량으로부터 설비를 보     호하기 위하여 앵글을 설치한다.

나. 앵글 설치규격은 양츨 천정보의 간격으로 하여 4M길이로 수평되게 천정에 설치     한다.

○ 앵글규격 : ㄱ형강 75*75 - 4M

○ 설치높이 : 설비를 보호할 수 있는 높이로 감독공무원과 협의

다. 설치되는 앵글은 녹을 방지하기 위하여 유성페인트로 도장한다.

5. 시운전

가. 공조배관 및 설비배관 지지물 공사를 완료한 후 시운전을 실시하여 각각의 설비     가 정상적으로 기능을 발휘하여 작동하는지 점검을 한다.

나. 철거된 배관이 지정장소에 보관되어 있는지 감독공무원에게 확인을 받는다.

6. 위 사항과 관련하여 감독공무원과 충분히 협의하여 시공하고 감독공무원이 추가사항을 설치목적에 맞게 요구시 시공자는 성실히 협의하여 시공한다.