행낭구분기 슈트 높이조정 및

트레이구분기 슈트철거 공사 설명서

1. 공사목적

행낭구분기 슈트의 위치를 조정하고 안전철망을 설치하여 작업장 근무환경 개선 및 안전사고를 예방하고, 트레이구분기 슈트를 철거하여 소포작업공간을 확보하고자 함

2. 공사개요

가. 공사명 : 행낭구분기 슈트 위치조정 및 트레이구분기 슈트 철거

나. 위  치 : 충북 청주시 흥덕구 수곡2동 619번지 청주우편집중국

다. 공사기간 : 착공일로부터 14일

라. 공사내용

1) 행낭구분기 슈트(14EA) 높이 상향조정(200mm)

2) 행낭구분기 슈트별 안전철망 설치

3) 트레이구분기 스파이럴슈트 철거(3EA)

3) 기타사항 : 공사설명서 및 도면 참조

제1장 일반사항

1. 본 공사설명서는 청주우편집중국 행낭구분기 및 트레이구분기에 적용하며 관계법령 또는 별도로 정한 규정에 따른 사항을 제외하고는 본 설명서에 준하여 시공한다.

2. 계약자는 계약체결 후 공사전반에 대하여 충분한 조사와 검토를 행한 후 다음 사항에 대하여 감독공무원의 협의를 받은 후 본 공사를 시행한다.

가. 공사공정표

나. 기타 제작도면 및 공사방법

3. 공사기간 중 현장책임자는 작업전과 종료 후 작업내용을 감독공무원에게 보고한다.

4. 계약자는 시공시 기존 설비나 시설물에 손상을 입혔을 때는 원상복구 후 작업에 임하여야 한다.

5. 계약자는 공사전과 공사 후 사진을 제출하여야 한다.

6. 본 공사는 우리국 근무자 또는 작업자에게 업무에 지장을 주지 않도록 감독공무원과 사전에 충분히 협의한 후 시공한다.

7. 시공 및 철거시 작업자는 정리정돈을 철저히 하고 작업 중 발생한 쓰레기와 폐기물은 시공사가 처리한다.

8. 본 공사에 사용하는 자재는 KS규격 및 동등이상의 제품으로 사용하고, 사용전에 반드시 감독공무원의 검사를 받고 불합격품은 즉시 현장 외로 반출하여야 한다.

9. 본 공사에 관계하는 인원의 출입은 우리국의 통제에 따르고 인적사항(성명, 전화번호 등)요구사항이 있으면 관련사항을 서면으로 제출한다.

제2장 안전사항

1. 안전관리 소홀로 발생되는 안전사고는 계약자가 책임지며, 화재의 위험이 있는 곳 또는 용접기를 사용시는 반드시 소화기를 비치한다.

2. 계약자는 안전관리책임자를 지정 또는 선임하고 시공 개시부터 완료까지 작업장 내의 안전상태를 수시로 점검하여 안전사고를 방지한다.

3. 계약자는 인사사고 또는 기타 안전사고에 대하여 계약자 부담으로 민, 형사상 책임을 진다.

4. 기타 안전사고 발생 요인이 발생하여 감독공무원이 지시할 경우 반드시 조치하여야 하며 또한 안전사고에 유의하여 시공을 하여야 한다.

제3장 특기사항

1. (목적) 본 공사는 행낭구분기 슈트 높이를 조정하여 작업공간을 확보하고 안전철망 설치로 안전사고를 예방하며, 트레이구분기 슈트를 철거하여 소포작업공간을 확보하는 공사목적에 만족하여야 한다.

2. (행낭 슈트) 행낭구분기 슈트의 높이를 조정하여야 한다.

가. 높이조정수량 : 14대(#01~#14)

나. 높이조정대상 : 행낭구분기 슈트 부위

다. 조정높이 : 현재 설치위치로부터 200mm 상향

라. 높이조정을 하기 위하여 지지대 절단 후 용접할 때 사항

1) 용접공은 ‘한국산업 인력공단’에서 발행하는 용접자격증을 가진자로서 실무에 1년 이상 계속 종사한 자로 한다.

2) 용접부위의 강도는 절단하기 전의 강도 이상이어야 한다.

3) 용접부위의 강도가 약할 때에는 모재와 같은 재질로 덧대어 보강한다.

3. (안전철망 설치작업) 행낭구분기 슈트 공사 후 행낭 슈트 아래에 작업자가 있을 때 행낭이 구분되어 안전사고가 발생하지 않도록 안전철망을 설치한다.

가. 형식 : 작업 안할 때 상부에 고정된 안전철망을 슈트 입구에 설치한 후크(hook)에 걸어 막고 작업시에 철망을 여는 방식

나. 철망규격 : 메쉬벨트 [S Type S-20-2.3 스테인레스 재질]

다. 설치위치 : 슈트를 3구간으로 나누어 설치

(슈트#1~#5, 슈트#6~#10, 슈트#11~#14)

라. 설치방식

1) 안전철망 : 철망 상부는 정비대에 고정하고 철망 하부는 후크 고정용 파이프를 설치

2) 후크(hook) : 행낭 슈트에 설치(행낭구분작업에 방해가 되지 않는 곳)

마. 도색

1) 안전철망 : 철망 하단부로부터 50mm 위험표시

2) 후크 : 행낭구분기 슈트와 동일

바. 기타세부사항 : 감독관과 협의

4. (작업대 사다리 철거 및 이동) 행낭슈트 #14에 있는 정비대사다리를 철거하여 패킷구분기 정비대의 계단철거부분에 부착한다.

5. (트레이구분기 슈트) 트레이구분기 슈트를 철거하고 보관작업을 하여야한다.

가. 철거수량 : 3대(#18~#20)

나. 트레이구분기 스파이럴슈트 부분

다. 보관장소 : 지하주차장 지정장소

라. 기타작업 : 전원분리, 케이블 철거작업, 바닥보호대 철거작업 등

6. (시운전) 행낭구분기 슈트 높이조정공사에 따른 시운전기간은 3일로 하며 공사 목적을 만족시켜야 한다

가. 행낭구분기 사용시에 행낭 아랫부분이 슈트 상부에 닿는지 확인

나. 행낭 및 안전철망 하단부가 파렛 작업에 지장이 없는지 확인

다. 안전철망이 후크에 안정적으로 걸리고, 작업자가 쉽게 사용할 수 있을 것

7. 위 사항과 관련하여 감독공무원과 충분히 협의하여 설계 및 시공하고 감독공무원이 추가사항을 설치목적에 맞게 요구시 시공자는 성실히 협의하여 시공한다.