곡성우체국 도장 공사 설명서

Ⅰ. 공사개요

1. 개  요

청사내부 퇴색부분의 도색 실시로 쾌적한 근무환경을 조성하고자 함

2. 공 사 명  : 곡성우체국 도장 공사

3. 공사장소  : 전남 곡성군 곡성읍 읍내리 319

4. 공사내역  :

도장공사면적 (총259.28㎡)	○ 365코너 33.90㎡ ○ 청사내부 7.20㎡ ○ 복도 75.0㎡, 계단 11.60㎡ ○ 방풍실 12.0㎡, 경비실 42.0㎡ ○ 외부현관 8.40㎡, 발착실 69.18㎡

5. 공사기간  : 착공일로부터 7일 이내

Ⅱ. 일반설명서

1. 적용범위

1-1. 본 도장공사를 시행함에 있어 공사 일반 표준설명서와 특별설명서에 기술된

내용을 토대로 시공하여야 한다.

본 설명서에 명시되지 않은 사항은 건설교통부제정 표준시방서에 의한다.

2. 공사기준

2-1. 시공업자가 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 감독공무원을

경유한다.

2-2. 시공업자는 감독공무원의 지시에 따라야 하며 설계 및 공법에 이견이 발생하였을

때에는 특별한 사유가 없는 한 북광주우체국의 결정에 따라야 한다.

3. 감독공무원

3-1. 본 설명서에서 감독공무원이라 함은 이 공사의 계약 내용이 적정하게 이행되는가를

지휘 감독하는 공무원을 말한다.

4. 현장대리인

4-1. 현장대리인은 공사 시공에 적합한 기술면허를 소지한 자로서 성명, 경력 등에

대하여 북광주우체국의 적부 승인을 사전에 받아야 하며 북광주우체국으로

부터 부적당하다는 통지를 받았을 때에는 즉시 현장대리인을 교체하여야 하며,

공사시공 중 시공업자 의사에 의거 교체시에도 북광주우체국의 사전 승인을

받아야 한다.

4-3. 현장대리인은 공사현장에 상주하여 감독공무원의 지시에 따라야 하고,

계약자를 대신하여 공사 시공, 재해방지, 사용인, 작업원에 대한

사항 등 시공업자가 이행하여야 할 모든 사항에 대하여 책임을 지고 처리하여야

하며,  현장 이탈 시에는 감독공무원의 사전 승인을 받아야 한다.

4-4. 작업원의 기능, 지식, 숙련도에 대하여 감독공무원이 부적격자로 판정 통보

시에는 현장 대리인은 그 작업원을 즉시 교체하여야 한다.

5. 이의

5-1. 설명서 등의 내용에 상이점이 있거나 명기가 없을 때 또는 의문이 생겼을

경우에는 감독공무원과 협의하여 북광주우체국 결정에 따른다. 단, 경미한

사항에 대하여는 감독공무원의 지시에 따른다.

6. 공정 및 시공계획서

6-1.시공업자는 공사 시행에 있어 공사 전반에 대한 공정별, 세부공사 시행계획을

작성하여 착공일로부터 2일 이내에 제출하여야 한다.

- 공사 시행순서 및 방법, 예정공정표

- 현장대리인계(현장대리인 기술면허증 사본 첨부)

6-2. 시공업자는 기타 요구사항에 대하여 감독공무원의 요구가 있을 경우에는 관계

서류를 제출하여야 한다.

7. 공사의 진도관리

7-1. 감독공무원은 시공업자가 제출한 공사 예정표를 필요한 때에는 구간, 공정별

시공순서와 일정을 조정할 수 있다.

이때 시공업자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 하며, 따르지 못한 때에는

그 사유를 서면으로 제출하여야 한다.

7-2. 감독공무원은 시공업자로부터 작업일보를 받아 그 내용을 검토 확인하여야 한다.

8. 시공 후 검사가 불가능한 부분의 검사

8-1. 공사 시공 후 검사가 불가능한 부분은 공정별로 감독공무원의 검사를 서면으로

또는 도면 사진 등으로 받아 두어야한다.

9. 공사현장 및 안전관리

9-1. 현장대리인은 항상 출입자의 감시, 사고, 화재, 도난의 예방 및 풍기위생의

단속에 충분한 조치를 취하여야 한다.

9-2. 인부의 재해 등 모든 사고 발생시 시공업자가 책임을 진다.

9-3. 공사장에 인접한 모든 시설에 피해를 끼치지 않도록 필요한 제반 조치를 하여

야 하며, 기존 시설물의 훼손 및 피해 발생시에는 시공업자 부담으로 즉시 원상복구

하여야한다.

9-4. 공사용 모든 자재는 파손 또는 변질되지 않도록 보관에 만전을 기하여야 한다.

9-5. 현장대리인은 항상 공사 중이나 후에 주위를 깨끗이 정리정돈 하여야한다.

9-6. 장비 및 공기구는 시공업자가 준비하여야 하고, 항상 최적의 성능을 유지해야          한다.

10. 자재관리

10-1. 본 공사에 사용되는 모든 자재는 감독공무원의 검사 확인을 받은 후 공사장에

반입하여야 한다.

10-2. 시공업자가 도급하는 도급자재는 KS 표시품 및 설명서 규격품으로서 신품이어야

하고, 자재 검사결과 불합격품은 즉시 공사장 외부로 반출하여야 하며,

신품으로 대체하여야한다.

10-3. 감독공무원은 필요에 따라 공사재료의 품질시험을 계약자에게 요구할 수 있으며,

모든 수수료는 계약자가 부담한다.

11. 공사관리

11-1. 본 공사의 시공은 시공업자가 시행하여야 하며 하도급을 금한다.

12. 관공서 기타의 수속

12-1. 시공한 필요한 관공서 기타 관련기관의 수속은 감독공무원의 확인을 받아 지체 없이 실시해야 하며 시공과 준공에 지장이 없도록 하여야 한다. 이때 소요되는 비용은 시공업자 부담으로 한다.

12-2. 관공서 등 수속에 소요되는 기간이 계약 시 공사기간에 산입되지 않는 경우에는

그 기간만큼의 계약기간 연장에 대하여 계약담당공무원과 협의 후 조정한다.

13. 준공검사

13-1. 준공검사는 본 설명서에 준하며 불량한 사항은 지체 없이 시공업자 부담으로       개수하고 재검사를 받는다.

13-2. 준공검사 시 제출서류

1) 준공검사원 1부.

2) 시공 전 . 후 사진첩 1부.

14. 본 공사의 하자보증기간은 준공일로부터 2년으로 하며, 기간 내 하자

발생시 시공업자는 무상으로 보수 하여야 한다.

15. 청소 및 원상복구

15-1. 공사가 완료되었을 때에는 공사장 주변의 정돈 및 청소를 하여 공사시공시

지면, 기존물의 변경 손상된 부분을 원상복구 한다.

Ⅲ. 특별설명서

1. 페인트 칠하기는 먼저 들뜬 부위를 제거하고 파인곳,크렉이 발생한 곳은

구멍땜용 퍼티를 나무주걱 등으로 얇게 눌러 채우고 건조 후에는

연마지(150-180)로 마무리한다.

2. 도장시 시설물에  페인트가 떨어지거나 묻지 않도록 포장 등을 깔고 벽면,

유리창 등에는 마스킹 테잎 등으로 태핑하고 칠한다. 만약 묻었을 시

즉시 닦아낸다.

3. 도장 작업 시에는 장비 및 집기류 등에 손상이 가지 않도록 사전 조치를

취한 후 작업을 실시한다.

4. 색상 선정 등은 감독공무원과 협의 후 작업을 실시한다

5. 작업 시 각종 기기의 먼지 및 이물질의 침입 방지를 위하여 비닐 또는 기타

재료를 이용하여 제반 조치를  강구하는 등 안전에 유의하여 시공하며, 또한

감독공무원과 작업일정을 협의하여 업무에 지장이 가지 않도록 하여야 한다.