시   방   서

Ⅰ. 공사개요

1. 공 사 명 : 고달우체국 옥상 방수 공사

2. 공사장소

○ 고달우체국(전남 곡성군 고달면 목동리 677번지)

3. 공사내역

○ 청사옥상 방수공사(총 108.25㎡ : 옥상바닥 80.50㎡, 난간 27.7㎡)

4. 공사기간 : 착공일로부터 7일

Ⅱ. 일반설명서

1. 적용범위

1-1. 본 공사를 시행함에 있어 공사 일반 표준설명서와 특별설명서에 기술된 내용을 토대로 시공하여야한다.

본 설명서에 명시되지 않은 사항은 건설교통부제정 표준시방서에 의한다.

2. 공사기준

2-1. 계약자가 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 감독공무원을 경유한다.

2-2. 계약자는 감독공무원의 지시에 따라야 하며 설계 및 공법에 이견이 발생하였을 때에는 특별한 사유가 없는 한

북광주우체국의 결정에  따라야 한다.

3. 감독공무원

3-1. 본 설명서에서 감독공무원이라 함은 이 공사의 계약 내용이 적정하게 이행되는가를 지휘 . 감독하는 공무원을 말한다.

4. 현장대리인

4-1. 현장대리인은 공사 시공에 적합한 기술면허를 소지한 자로서 성명, 경력 등에 대하여 북광주우체국의 적부 승인을 사전에 받아야 한다.

4-2. 계약자는 현장대리인에 대하여 북광주우체국으로부터 부적당하다는 통지를 받았을 때에는 즉시 현장대리인을 교체하여야 하며, 공사시공 중 계약자 의사에 의거 교체 시에도 북광주우체국의 사전 승인을 받아야 한다.

4-3. 현장대리인은 공사현장에 상주하여 감독공무원의 지시에 따라야 하고, 계약자를 대신하여 공사시공, 재해방지, 사용인, 작업원에 대한 사항 등 계약자가 이행하여야 할 모든 사항에 대하여 책임을 지고 처리하여야 하며,  현장 이탈 시에는 감독공무원의 사전 승인을 받아야 한다.

4-4. 작업원의 기능, 지식, 숙련도에 대하여 감독공무원이 부적격자로 판정 통보 시에는 현장 대리인은 그 작업원을 즉시 교체하여야 한다.

5. 이의

5-1. 설명서 등의 내용에 상이점이 있거나 명기가 없을 때 또는 의문이 생겼을 경우에는 감독공무원과 협의하여

북광주우체국의 결정에 따른다. 단, 경미한 사항에 대하여는 감독공무원의 지시에 따른다.

6. 공정 및 시공계획서

6-1. 계약자는 공사 시행에 있어 공사 전반에 대한 공정별, 세부공사 시행계획을 작성하여 착공일로부터 2일 이내에

제출하여야 한다.

- 공사 시행순서 및 방법, 예정공정표

- 현장대리인계(현장대리인 기술면허증 사본 첨부)

6-2. 계약자는 기타 요구사항에 대하여 감독공무원의 요구가 있을 경우에는 관계 서류를 제출하여야 한다.

7. 공사의 진도관리

7-1. 감독공무원은 계약자가 제출한 공사 예정표를 필요한 때에는 구간, 공정별 시공순서와 일정을 조정할 수 있다.

이때 계약자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 하며, 따르지 못한 때에는 그 사유를 서면으로 제출하여야       한다.

7-2. 감독공무원은 계약자로부터 작업일보를 받아 그 내용을 검토 확인하여야 한다.

8. 시공 후 검사가 불가능한 부분의 검사

8-1. 공사 시공 후 검사가 불가능한 부분은 공정별로 감독공무원의 검사를 서면으로 또는 도면 사진 등으로 받아 두어야 한다.

9. 공사현장 및 안전관리

9-1. 현장대리인은 항상 출입자의 감시, 사고, 화재, 도난의 예방 및 풍기위생의 단속에 충분한 조치를 취하여야 한다.

9-2. 인부의 재해 등 모든 사고 발생시 계약자가 책임을 진다.

9-3. 공사장에 인접한 모든 시설에 피해를 끼치지 않도록 필요한 제반 조치를 하여야 하며, 기존 시설물의 훼손 및

피해 발생시에는 계약자 부담으로 즉시 원상복구 하여야한다.

9-4. 공사용 모든 자재는 파손 또는 변질되지 않도록 보관에 만전을 기하여야 한다.

9-5. 현장대리인은 항상 공사 중이나 후에 주위를 깨끗이 정리정돈 하여야한다.

9-6. 장비 및 공기구는 계약자가 준비하여야 하고, 항상 최적의 성능을 유지해야 한다.

10. 설계변경

10-1. 공사 시공도중 설계도면 대로 시공이 불가능할 경우 감독공무원은 계약공무원에게 지체없이 보고하여 설계변경

승인을 득한 후 시공한다.

10-2. 시공도중 감독공무원으로부터 설계변경 지시가 있을 때에는 계약자은 이의 없이 응하여야한다.

10-3. 계약자는 공사 시공 전 설계서와 상이점이 발견될 시에는 감독공무원에게 보고하여 지시를 받아야 하며 공사

시공 후 발견된 사항에 대하여는 계약자 부담으로 시공하여야 한다.

10-4. 계약자는 본 공사의 계약을 위해 작성한 설계서 중 발주처가 적용하는 표준품셈, 물량, 단가, 노임단가 및 할증

적용이 기준보다 과다 책정되었음을 계약체결 후 또는 준공 후에 발견하더라도 북광주우체국으로부터 감액 또는

환불  요구가 있을 시에는 이를 수락하여야 한다.

10-5. 재료의 수치 및 설치공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량증감 등의 경미한 변경은 감독공무원의

지시에 따라 계약자 부담으로 한다.

10-6. 공사 중이라도 미려하고 개선된 방법으로 시공이 가능하여 감독공무원이 변경 시공 지시를 할 경우 계약자는

이를 수용한다.(단, 계약금액의 변동은 없는 것으로 한다.)

11. 자재관리

11-1. 본 공사에 사용되는 모든 자재는 감독공무원의 검사 확인을 받은 후 공사장에 반입하여야 한다.

11-2. 계약자가 도급하는 도급자재는 KS 표시품 및 설명서 규격품으로서 신품이어야 하고, 자재 검사결과 불합격품       은  즉시 공사장 외부로 반출하여야 하며, 신품으로 대체하여야한다.

11-3. 감독공무원은 필요에 따라 공사재료의 품질시험을 계약자에게 요구할 수 있으며, 모든 수수료는 계약자가 부담       한다.

12. 공사관리

12-1. 본 공사의 시공은 계약자가 시행하여야 하며 하도급을 금한다.

13. 관공서 기타의 수속

13-1. 시공에 필요한 관공서 기타 관련기관의 수속은 감독공무원의 확인을 받아 지체 없이 실시해야 하며 시공과

준공에 지장이 없도록 하여야 한다. 이때 소요되는 비용은 계약자 부담으로 한다.

13-2. 관공서 등 수속에 소요되는 기간이 계약 시 공사기간에 산입되지 않는 경우에는 그 기간만큼의 계약기간 연장       에 대하여 계약담당공무원과 협의 후 조정한다.

14. 준공검사

14-1. 준공검사는 본 설명서에 준하며 불량한 사항은 지체 없이 계약자 부담으로 개수하고 재검사를 받는다.

14-2. 준공검사 시 제출서류

1)준공검사원 1부.

2)시공 전 . 후 사진첩 2부.

15. 본 공사의 하자보증기간은 준공일로부터 3년으로 하며, 기간 내 하자발생시 계약자는 무상으로

수리 또는 교체하여야 한다.

16. 청소 및 원상복구

16-1. 공사가 완료되었을 때에는 공사장 주변의 정돈 및 청소를 하여 공사시공 시 지면, 기존물의 변경 손상된 부분을 원상

복구 한다.

Ⅲ. 우레탄 방수 특별설명서

1. 하지정리 작업

1-1. 바닥이 들떠 있는 부분은 표면작업(그라인딩)을 한다.

1-2. 빗자루로 깨끗이 쓸고 물청소를 한다.

1-3. 물청소 후 바닥이 완전히 건조되도록 시간을 가진다.

2. 하도작업(우레탄 프라이머)

2-1. 도포작업 : 로울러, 에어리스, 붓 등으로 뭉치지 않게 골고루 도포하며 조밀하지 못한 부위는 1회 더 도포하여야 한다.

2-2. 양생 : 하절기(4시간 이상) 동절기(24시간 이상) 양생후 중도작업을 준비한다.

3. 중도작업(우레탄 노출중도제)

3-1 노출우레탄 3mm로 시공한다.

3-2. 배합 : 배합용기를 준비하여 주제와 경화제를 정해진 비율 중량비로 정확히 배합하며 1회 배합량은 1SET를 초과하지

않는 것이 좋다.(우레탄 신너는 중도 무게비에 10%를 초과하지 않는다)

3-3. 혼합 : 전동믹서를 이용하여 하도제 혼합때와 같은 방법으로 하여야 한다.

3-4. 1차 도포 : 로울러, 에어리스, 붓등으로 1㎡당 2.6㎏을 뭉치지 않게 골고루 도포한다.

3-5. 양생 : 현장온도에 따라 변동이 있으므로 2시간 정도 경화후 2차도포를 실행한다.

3-6. 2차 도포 : 1차 도포한 방법으로 로울러, 에어리스, 붓등으로 1㎡당 1.4㎏을 뭉치지 않게 골고루 도포한다.

4. 상도작업(우레탄상도 TOP코팅제)

4-1. 배합 및 혼합 : 중도작업 할때와 같은 방법으로 한다.

4-2. 도포 : 도장면(중도)의 이물질 제거후 상도 도장전 외관에 영향을 줄 수 있는 요인을 제거후 도장을 실시하여야한다.

4-3. 양생 : 24시간 이상 경화시켜야한다.

5. 프라이머를 바른 로울러와 우레탄을 바른 로울러를 구분하여 사용한다.