시   방   서

Ⅰ. 공사개요

1. 공 사 명 : 옥과우체국 바닥타일 교체 및 바닥세척 공사

2. 공사장소

○ 옥과우체국(전남 곡성군 옥과면 옥과리 128-1

3. 공사내역

○ 청사 바닥 데코타일 일부 철거 후 시공(4.70㎡)

○ 청사 바닥 세척 (147.30㎡)

○ 장애자용 손잡이 설치(세면기용 1개, 소변기용 1개)

4. 공사기간 : 착공일로부터 7일

Ⅱ. 일반설명서

1. 적용범위

1-1. 본 공사를 시행함에 있어 공사 일반 표준설명서와 특별설명서에 기술된 내용을 토대로 시공하여야한다.

본 설명서에 명시되지 않은 사항은 건설교통부제정 표준시방서에 의한다.

2. 공사기준

2-1. 계약자가 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 감독공무원을 경유한다.

2-2. 계약자는 감독공무원의 지시에 따라야 하며 설계 및 공법에 이견이 발생하였을 때에는 특별한 사유가 없는 한

북광주우체국의 결정에  따라야 한다.

3. 감독공무원

3-1. 본 설명서에서 감독공무원이라 함은 이 공사의 계약 내용이 적정하게 이행되는가를 지휘 . 감독하는 공무원을 말한다.

4. 현장대리인

4-1. 현장대리인은 공사 시공에 적합한 기술면허를 소지한 자로서 성명, 경력 등에 대하여 북광주우체국의 적부 승인을 사전에 받아야 한다.

4-2. 계약자는 현장대리인에 대하여 북광주우체국으로부터 부적당하다는 통지를 받았을 때에는 즉시 현장대리인을 교체하여야 하며, 공사시공 중 계약자 의사에 의거 교체 시에도 북광주우체국의 사전 승인을 받아야 한다.

4-3. 현장대리인은 공사현장에 상주하여 감독공무원의 지시에 따라야 하고, 계약자를 대신하여 공사시공, 재해방지, 사용인, 작업원에 대한 사항 등 계약자가 이행하여야 할 모든 사항에 대하여 책임을 지고 처리하여야 하며,  현장 이탈 시에는 감독공무원의 사전 승인을 받아야 한다.

4-4. 작업원의 기능, 지식, 숙련도에 대하여 감독공무원이 부적격자로 판정 통보 시에는 현장 대리인은 그 작업원을 즉시 교체하여야 한다.

5. 이의

5-1. 설명서 등의 내용에 상이점이 있거나 명기가 없을 때 또는 의문이 생겼을 경우에는 감독공무원과 협의하여

북광주우체국의 결정에 따른다. 단, 경미한 사항에 대하여는 감독공무원의 지시에 따른다.

6. 공정 및 시공계획서

6-1. 계약자는 공사 시행에 있어 공사 전반에 대한 공정별, 세부공사 시행계획을 작성하여 착공일로부터 2일 이내에 제출하여야 한다.

- 공사 시행순서 및 방법, 예정공정표

- 현장대리인계(현장대리인 기술면허증 사본 첨부)

6-2. 계약자는 기타 요구사항에 대하여 감독공무원의 요구가 있을 경우에는 관계 서류를 제출하여야 한다.

7. 공사의 진도관리

7-1. 감독공무원은 계약자가 제출한 공사 예정표를 필요한 때에는 구간, 공정별 시공순서와 일정을 조정할 수 있다.

이때 계약자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 하며, 따르지 못한 때에는 그 사유를 서면으로 제출하여야 한다.

7-2. 감독공무원은 계약자로부터 작업일보를 받아 그 내용을 검토 확인하여야 한다.

8. 시공 후 검사가 불가능한 부분의 검사

8-1. 공사 시공 후 검사가 불가능한 부분은 공정별로 감독공무원의 검사를 서면으로 또는 도면 사진 등으로 받아 두어야 한다.

9. 공사현장 및 안전관리

9-1. 현장대리인은 항상 출입자의 감시, 사고, 화재, 도난의 예방 및 풍기위생의 단속에 충분한 조치를 취하여야 한다.

9-2. 인부의 재해 등 모든 사고 발생시 계약자가 책임을 진다.

9-3. 공사장에 인접한 모든 시설에 피해를 끼치지 않도록 필요한 제반 조치를 하여야 하며, 기존 시설물의 훼손 및

피해 발생시에는 계약자 부담으로 즉시 원상복구 하여야한다.

9-4. 공사용 모든 자재는 파손 또는 변질되지 않도록 보관에 만전을 기하여야 한다.

9-5. 현장대리인은 항상 공사 중이나 후에 주위를 깨끗이 정리정돈 하여야한다.

9-6. 장비 및 공기구는 계약자가 준비하여야 하고, 항상 최적의 성능을 유지해야 한다.

10. 설계변경

10-1. 공사 시공도중 설계도면 대로 시공이 불가능할 경우 감독공무원은 계약공무원에게 지체없이 보고하여 설계변경

승인을 득한 후 시공한다.

10-2. 시공도중 감독공무원으로부터 설계변경 지시가 있을 때에는 계약자은 이의 없이 응하여야한다.

10-3. 계약자는 공사 시공 전 설계서와 상이점이 발견될 시에는 감독공무원에게 보고하여 지시를 받아야 하며 공사

시공 후 발견된 사항에 대하여는 계약자 부담으로 시공하여야 한다.

10-4. 계약자는 본 공사의 계약을 위해 작성한 설계서 중 발주처가 적용하는 표준품셈, 물량, 단가, 노임단가 및 할증

적용이 기준보다 과다 책정되었음을 계약체결 후 또는 준공 후에 발견하더라도 북광주우체국으로부터 감액 또는

환불  요구가 있을 시에는 이를 수락하여야 한다.

10-5. 재료의 수치 및 설치공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량증감 등의 경미한 변경은 감독공무원의

지시에 따라 계약자 부담으로 한다.

10-6. 공사 중이라도 미려하고 개선된 방법으로 시공이 가능하여 감독공무원이 변경 시공 지시를 할 경우 계약자는

이를 수용한다.(단, 계약금액의 변동은 없는 것으로 한다.)

11. 자재관리

11-1. 본 공사에 사용되는 모든 자재는 감독공무원의 검사 확인을 받은 후 공사장에 반입하여야 한다.

11-2. 계약자가 도급하는 도급자재는 KS 표시품 및 설명서 규격품으로서 신품이어야 하고, 자재 검사결과 불합격품은

즉시 공사장 외부로 반출하여야 하며, 신품으로 대체하여야한다.

11-3. 감독공무원은 필요에 따라 공사재료의 품질시험을 계약자에게 요구할 수 있으며, 모든 수수료는 계약자가 부담한다.

12. 공사관리

12-1. 본 공사의 시공은 계약자가 시행하여야 하며 하도급을 금한다.

13. 관공서 기타의 수속

13-1. 시공에 필요한 관공서 기타 관련기관의 수속은 감독공무원의 확인을 받아 지체 없이 실시해야 하며 시공과 준공에

지장이 없도록 하여야 한다. 이때 소요되는 비용은 계약자 부담으로 한다.

13-2. 관공서 등 수속에 소요되는 기간이 계약 시 공사기간에 산입되지 않는 경우에는 그 기간만큼의 계약기간 연장에

대하여 계약담당공무원과 협의 후 조정한다.

14. 준공검사

14-1. 준공검사는 본 설명서에 준하며 불량한 사항은 지체 없이 계약자 부담으로 개수하고 재검사를 받는다.

14-2. 준공검사 시 제출서류

1)준공검사원 1부.

2)시공 전 . 후 사진첩 2부.

15. 본 공사의 하자보증기간은 준공일로부터 2년으로 하며, 기간 내 하자발생시 계약자는 무상으로

수리 또는 교체하여야 한다.

16. 청소 및 원상복구

16-1. 공사가 완료되었을 때에는 공사장 주변의 정돈 및 청소를 하여 공사시공 시 지면, 기존물의 변경 손상된 부분을 원상복구 한다.

Ⅲ. 특별설명서

1.  바닥 개체공사

1-1. 데코타일은 450*450*3.0mm PVC타일을 사용하되 감독공무원과 협의 후 감독공무원이 지정한 데코타일(LG 파인급 이상)로            시공한다

1-2. 테코타일 제품은 KS3802 기준에 합격한 KS 표시품으로 바닥의 습기나 물청소 및 바닥 난방에 의한 제품 수축현상을        방지하기위해 유리 섬유층이 적층되고, 발포층을 포함한 전체 두께가2.3mm 이상으로 ISO 9002인증을 득한 제품이어야       한다.

1-3. 바닥재 시공하기 전에 바닥면은 건조하고, 청결하여야 하며, 요철, 굴곡이 없는 상태에서 시공하여야 한다.

1-4. 이음부의 절단시는 2~3CM 정도 겹쳐 이음부 틈새가 발생하지 않도록 주의하여 절단한다.

1-5. 붙일때에는 전용 접착제로 반드시 전면 접촉시공을 하여야 한다.

1-6. 가장자리와 이음부는 완전한 접착을 위하여 핸드로라 또는 50KG 로라로 압착하여 접착이 확실히 되로록 한다.

1-7. 이음부는 마른 헝겊으로 개끗이 닦은 후 반드시 웰딩 처리를 하여 수분이나 먼지 침투를 막거나 장기간 수축에 의한 이음매의 벌어짐을        막는다.

1-8. 벽면과 만나는 곳은 동일 색상의 무초산 실리콘으로 마무리한다.

1-9. 시공이 완료된 후에는 후 공정에 의한 바닥재의 손상방지를 위하여 적절한 보양을 한다.

1-10. 시공 시 모든 재료는 KS 제품 이상의 재질을 사용하고, 기존 제품보다 같은 가격의 좋은 성능의 제품이

있을 경우 감독공무원과  협의하여 교체할 수 있다.

1-11. 작업 시 각종 기기의 먼지 및 이물질의 침입 방지를 위하여 비닐 또는 기타 재료를 이용하여 제반 조치를 강구하는 등         안전에 유의하여 시공하며, 또한 감독공무원과 작업일정을 협의하여 업무에 지장이 가지 않도록 하여야 한다.

1-12. 작업종료 후 발생된 각종 폐기물은 환경법 및 기타 관계법령에 의거 처리하도록 한다.

2. 기타 보수 공사

2-1. 화장실 세면대 및 소변기에 장애인용 손잡이(스텐 38φ*1.2T이상급)를 1개씩 설치한다.

2-2. 시공 시 모든 재료는 KS 제품 이상의 재질을 사용하고, 기존 제품보다 같은 가격의 좋은 성능의 제품이

있을 경우 감독공무원과  협의하여 교체할 수 있다.

3. 바닥세척

3-1 청소작업으로 인한 제반사고 및 도난에 대하여는 용역회사가 변상 또는 책임을 진다.

3-2 약품은 인체에 무해한 것으로, 시설물을 훼손하지 않도록 사용하여야 한다.

3-3 세제를 사용하여 표면의 묵은 광택제, 피막제, 마포처리제(리스킹 오일, 경유 등), 먼지, 때, 오물 등을 완벽하게 제거한다

3-4 공사발주처에서 청소완료 후 불결하다고 인정하여 재청소를 명시 할 때는 재청소를 실시하여야 한다.

3-5 작업자는 작업전에 반드시 안전장비 점검하고 장구 착용하고 작업에 임하여 한다.

3-6 작업중 안전 사고에 대한 책임은 계약상대자가 부담한다.

4. 기타사항

4-1. 준공 후 또는 공사중 발생된 폐자재는 반드시 적정한 방법으로 반출하며, 시공 중 발생되는 주위 재산의 파손 등은 전적으로

시공자 부담으로 원상 복구한다.

4-2. 기성품, 중요자재 등의 자재는 반드시 감독공무원의 승인을 득한 후 사용하여야 하며, 준공시에는 청소 및 뒷정리를 완벽히

처리하여야 한다.

4-3. 본 공사는 영업창구임을 감안하여 창구업무에 지장이 없도록 업무종료 후 또는 근무 시간외 적절한 시간을 택하여 공사한다.