공 사 시 방 서

공사명 : 고달우체국 주차장신설공사

2009. 11. 18

곡성우체국

제 1 장   총       칙

1-1. 공 사 명 : 고달우체국 주차장신설 공사

1-2. 위    치 : 전남 곡성군 고달면 목동리 677-1

1-3. 공사시간 : 착공일로부터 14일

1-4. 공사 내용

가. 철거공사

나. 화단일부 철거 및 이설 및 수목이식공사

다. 주차장 신설공사

라. 기타공사

제 2 장   일반시방서

2-1. 이 시방에 기재되지 않은 일반부분은 건축공사 표준시방서에 준하여 시공하여야 함.

2-2. 계약자는 착공과 동시에 주요자재 규격서(사양, 재질, 색상 등), 시공계획서, 공정표,

인력 동원계획서 등을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

2-3. 재료는 KS규격품 또는 이와 동등 이상의 품질과 재료를 선택하여 하자가 없어야

한다.

2-4. 자재검사는 현장 도착 시 실시하며 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

2-5. 작업 중 기존 시설물의 훼손 시는 시공자 책임 하에 즉시 복원조치를 하여야 한다.

2-6. 작업자는 반드시 안전용구를 착용하고 작업에 임해야 하며, 제반 안전사고에 대한

책임을 진다.

2-7. 작업 중 경미한 변경사항은 감독관과 협의하여 지시에 따라야 한다.

2-8. 작업 완료 후 주변청소를 실시하며 감독관의 검사를 필히 득하여야 한다.

제 3 장   특별시방서

3-1. 철거공사

가. 철거작업과 여타 작업과의 연계공정표를 작성하여 작업착수 전에 감독관의

승인을 받아야 한다.

나. 먼지, 소음발생의 억제를 위한 상세한 보호조치를 해야 한다.

다. 부속동의 노후된 건물, 담장일부, 정화조를 철거하며 철거건물에 있는 전기를 본 청사로

이설한다.

라. 철거 작업 시 담장 및 바닥에 결함이 발생되지 않도록 주의 하여 철거하도록 하며 결함

이 발생 되었을 경우에는 결함이 발생한 부위를 원상복귀한 후 시공하여야 한다.

이때 발생하는 모든 비용은 계약자의 부담으로 한다.

마. 철거공사 후 발생하는 건설폐기물 처리는 계약자가 처리하는 것을 원칙으로 한다.

3-2. 화단 철거 및 이설 및 수목이식공사

가. 화단 일부를 철거하며 수목은 감독관의 승인을 얻어 이식하고 잔토 처리를 하며

조성된 화단 가장자 리에 적벽돌을 쌓는다.

나. 옥외소화전은 소방서에 확인을 한후 감독관의 승인을 얻어 적정 장소에 이설한다.

3-3.  주차장 신설공사

가. 잡석을 1Ton 진동롤러를 사용하여 잘 다져서 평면을 유지한다.

나. 와이어메쉬(규격 : #8-100-100)를 120㎡ 전체에 포설한다.

다. 콘크리트를 10cm 두께로 포설한다.

라. 아스콘 표층포설은 5cm 두께로, 기층포설은 10cm 두께로 포설하여 공사한다.

마. 수평은 주차장에서 나오면서 차량의 앞부분이 닿지 않도록 경사를 완만히 유지하여

야 한다.

바. 진동롤러기등을 사용하여 20회이상 다짐을 한다.

사. 주차선은 감독관과 상의하여 주차 공간에 맞게 도장한다.

아. 담과 건물사이에 스텐 자바라를 설치한다.

자. 허문 담장위치에 칼라 휀스를 설치한다.

3-4. 기타

가. 혼합폐기물과 폐콘크리트 폐기물을 처리하고 폐기물처리확인서를 제출한다.

나. 공사과정(전,진행,후)을 사진촬영후 공정별 순서대로 정리하여 제출한다.