설 계 설 명 서(안)

1. 용   역   명  : 수원(집) 기계설비감시용 보안시설 설치 설계용역

2. 설 계 설 명 자 : 사업개발팀

3. 특기사항

가. 본 설계도서 작성은 전기설비기술사의 책임아래 작성한다.

나. 설계용역 기간은 착수일로부터 25일이며, 설계내용 협의 등의 일정을 포함한 기간이다.

다. 착수계는 계약후 2일 이내 제출하여야 하며, 착수계에는 책임기술자 선임계, 설계예정공정표, 분야별 참여기술자 명단, 보안각서 및 기타 발주처가 요구하는 사항이 포함되어야 한다.

라. 설계시 우리단과 충분한 협의를 거쳐 설계완료 하여야 하며 공사규모 변경은 배정예산액 범위내에서 변경가능하다.

마. 본 건물에 대한 예정공사비는 배정예산액 범위 내에서 적정하게 설계하여 공사시행에 차질이 없도록 하여야 한다.

바. 전기설계는 전력기술관리법에 의거 해당분야 유자격자가 설계하여야 한다.

사. 통신설계는 정보통신공사업법 및 엔지니어링기술진흥법에 의거 해당분야 유자격자가 설계하여야 한다.

아. 착수후 책임기술자는 즉시 현장 정밀실사를 실시하여 자료조사 결과를 보고하여야 하며 문제점이 있을 경우 그 사항과 대책을 포함하여 보고한다.

설계용역 과업지시서(안)

1. 용 역 명 : 수원(집) 기계설비감시용 보안시설 설치 설계용역

2. 설계기간 : 착수일로부터 25일간

3. 설계개요

구 분	과 업 내 용	비 고
설계범위	1. 1층 작업장 및 지하 CCTV카메라 신설 및 이설 - 서장제어실: 1. 기존 설치된 DVR교체(57CH) 2. 카메라 회선 분리(기술과, 업무과, IP 등) 3. CCTV Controller 설치 - 작업장: 1. 카메라 이설 2. 불량 카메라 철거 후 신설 또는 이설 3. 중복 감시영역(기술과, 업무과, 당직실) 삭제 4. 불량 회선 철거 후 신설 - 동력실: 1. 전기실 1CH 카메라 설치 2. 기계실 1CH 카메라 설치 3. 동력실 DVR설치 2. 2층 소포 제어실 모니터링 장비 신설 - 서장제어실과 인터페이스를 통한 모든 CH 모니터링 장비 설치 3. 2층 업무과 - 서장제어실과 인터페이스를 통한 모든 CH 모니터링 장비 설치 - 업무과에 설치된 DVR --> 서장제어실로 이동 후 설치 4. 2층 국장실 모니터링 장비 철거후 신설 - 서장제어실과 인터페이스를 통한 모든 CH 모니터링 장비 설치 * 시방에 포함 되어야 할 사항 - 공사는 우체국 업무시간외에 시행 (휴일) - 안전관리 사항 - 365코너등은 무정전 유지

4. 특기사항

가. 공사비는 소요예산을 초과할 수 없으며, 부득이 초과할 경우 사전에 발주처의 승인을 득하여 증액할 수 있다. 다만, 공사규모는 추정 공사비를 감안하여 예산액 내에서 조정할 수 있다.

나. 용역 설계자는 아래사항을 조사하여 우리단에 제출하여야 하며 공사에 차질이 없도록 설계에 반영하여야 한다.

- 사전조사사항, 계획 및 방침(주요한 설계기준,  형식선정, 용량결정 등),

- 기타 발주처에서 제시하는 사항

다. 용역 설계자는 과업책임자를 지정하여 관련법규 및 지침에 따라 현장의 현황, 자료 분석을 철저히 하여 과업을 착오 없이 시행하여야 한다.

라. 과업기간

1) 본 과업은 착수일로부터 25일 이내에 납품하여야 한다.

2) 착 수

용역 설계자는 계약후 2일 이내 과업에 착수하여야 하며, 착수시에는 과업수행 계획서(공정표 포함)을 동시에 제출하여 승인을 받아야 한다.

3) 진행보고

가) 용역 착수후 매주 금요일에 과업의 책임기술자가 공정보고를 하여야 하며, 발주기관 요구 시 용역 진행사항 및 중간 성과품에 대한 서면 보고를 한다.

나) 설계용역 납품예정일 3일전에 납품목록 및 성과품에 대한 예비검사를 받도록 하여야 하며, 수정을 요하는 부분은 반드시 수정하여 납품하여야 한다.

마. 업무내용 보안유지

용역 설계자는 용역 수행과정에서 얻어진 일체의 자료 및 내용 등을 우리단의 사전승인 없이 외부에 제공 또는 공개하여서는 안된다.

바. 관계기관 협의

용역 설계자는 설계도서 납품전 관련법규에 의한 인.허가 필요시 사전 관계기관 협의를 거쳐 납품하여야 하며, 이와 관련된 비용은 용역 설계자 부담으로 한다.

사. 용역비 정산

공사금액변경에 의한 용역비 증감사항이 있을 경우에는 용역비를 정산할 수 있다.(단, 용역비가 증가 될 때는 용역비 내에서 지급한다)

아. 설계변경

1) 본 용역은 조사당시 수집된 자료에 의거 발주한 바, 과업 수행상 변경사항이 발생하였을 경우 실지 여건에 따라 변경할 수 있다.

2) 공사 진행중 설계변경에 대한 내용(설계도면 미비 및 부적합 부분, 산출근거 상이 등)을 공사감독관이 요구할 때 즉시 설계자 의견 및 설계변경 도면을 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

자. 설계자재

K.S 자재를 우선 적용하며, 신기술․신자재 및 친환경 자재를 고려한다.

차. 적용요령

1) 용역의 수행은 본 지침서에 의하되 세부적인 사항은 감독관과 협의하여야 결정한다.

2) 본 지침서외에 정부 관계규정 및 각종 시행기준을 준수하여야 하며, 본 지침서와 상이한 부분에 있을  때에는 본 지침서를 우선 적용한다.

3) 본 지침서에 제시된 사항은 용역 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 지침서 내용이 불분명 하거나 명시되지 아닌 사항에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

4) 본 지침에 대한 대안은 제시할 수 있으며 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주처의 승인 후 채택될 수 있다.

카. 기타 특기사항

1) 불명확한 사안은 발주처 담당자와 우선 협의하여야 한다.

※ 납품 목록(CD 포함)

[설계도, 시방서, 내역서, 일위대가, 수량산출서, 산출근거서 각 3부]