공 사  설 명 서

□ 공 사 명 : 서울장안2동우체국 창구환경 개선공사

□ 공사목적 : 노후 창구시설을 보수하여 고객만족 및 효율적인 청사관리 도모

□ 공사 내용

ㅇ 공사 위치 : 서울장안2동우체국(동대문구 사가정로 240)

ㅇ 주요 공사 내용

구 분	주 요 공 사 내 용	비 고
노후창구 시설보수	1. 미디어라인 교체 2. 바닥 비닐계 타일 교체 및 폐기물 처리

ㅇ 공사 기간 : 착공일로부터 21일

□ 특기 사항

ㅇ 우체국 업무에 차질이 없도록 가급적 휴일 작업을 진행하는 것으로 우체국과 일정을 협의하여 공사계획을 수립한다.

ㅇ 제품에 대한 시방서 및 내역서에 명시된 제품이거나 또는 동등 성능이상의 제품을 사용하여야 한다.

ㅇ 폐기물은 관련 법령에 적합하도록 처리하고 최종준공 시 올바로시스템 입력, 처리사항을 제출한다.

ㅇ 우체국은 임차청사로 주차가 불가능하므로 자재의 수급계획 및 공사 관련 주차를 하지 않도록 공사 계획을 수립한다.(주차비가 별도 발생할 경우 수급자 부담으로 한다.)

ㅇ 미디어라인 적용 색상

구 분	색상	NO.	비 고
우편		Pantone 485C M 95 Y 100	열처리 도장 또는 필름
금융		Pantone 130C M 30 Y 100	열처리 도장 또는 필름

ㅇ 미디어라인은 우정사업본부의 『창구디자인 표준 매뉴얼』의 단순형을 기준으로 설치한다.

- 미디어라인의 높이는 400~500mm 사이에서 발주청과 협의

- 글씨 폰트는 윤디자인 2002(색상은 발주청과 협의)

ㅇ 필요시 전산망 등의 사전 작업이 필요하므로 계약 상대자는 계약과 동시에 공사 일정에 대해 발주청과 협의한다.

□ 공사 일반사항

1. 공사의 착수

가. 사전 협의사항

시공자는 본 공사의 시행에 있어서 공사 착수 전에 다음 사항에 대한 공사 시행 세부공정표를 별도로 작성 제출하여 감독관과 협의 후 시행한다.

1) 공사 시행순서

2) 인원투입 계획

3) 기타 필요한 사항

나. 제출서류

시공자는 공사 착수전에 다음 서류를 제출한다.

1) 착공계

2) 현장대리인계

3) 안전관리계획서

4) 기타 규정에 의한 제반서류

2. 공사의 시행

가. 공사 시공

1) 본 공사는 도면 및 시방에 명시되어 있는 내용에 의거 시공하며 도면 및 시방에 명기되어 있지 않는 내용은 감독관의 지시에 따라 시공한다.

2) 시공자는 공사의 공정을 바르고 또 안전하게 시공하기 위하여 적절하고 합리적인 방법으로 감독관에게 협력하여야 한다.

3. 공사의 중지

감독관은 다음 사항에 대하여 공사의 일부 또는 전부에 대하여 시정 및 중지를 요구할 수 있다.

가. 시공자가 설계도서나 시방서와 상이하게 시공하거나 또는 감독관의 지시에 응하지 않을 경우

나. 천재지변 또는 기타 부득이한 사유가 발생하였을 경우

4. 재   료

가. 재료일반

재료의 품질, 규격, 치수는 설계도서 및 시방서에 지정한 것과 같아야 하며, 모두 KS규격 표시의 신품을 사용하여야 한다.

나. 견  본

감독원이 지정하는 제품의 재료, 마무리정도, 색상 등은 미리 견본을 제출하여 감독관의 승인을 받아 시공하여야 한다.

다. 검  사

현장에 반입한 주요자재는 반입 즉시 자재검수 요청서를 제출하여 감독관의 검사를 받아야 하며, 불합격품은 즉시 장외로 반출시킨다.

5. 사   진

시공자는 다음과 같은 사항을 촬영하여 사진첩을 작성 감독관에게 제출하여야 한다.

가. 공사착수 전 현황 사진

나. 부분별 공사 시공광경 및 감독원이 지시하는 공사

다. 시공 후 검사가 불가능한 장소

라 .준공 후 사진

6. 공사변경

현장 마무리, 맞춤 등의 관계로 재료의 설치위치에 따라 수반하는 약간의 수량 증감 등은 감독관과 협의 후 시행한다.

7. 시공검사

가. 각 공사부분은 미리 감독관이 지정한 공정에 이르렀을 때 검사를 받아 승인을 얻은 후 다음 공정에 옮긴다.

나. 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독관의 입회하에 시공하며 시공자 임의로 시공하여 발생되는 제반 문제점은 시공자 부담으로 재시공 해야 하며, 시공자는 감독관의 지시에 따라야 한다.

8. 공사장 관리

공사장 관리는 산업안전보건법, 근로기준법 등 관계 규정에 따라 시행하고 아래 각 항을 준수해야 한다.

가. 공사가 실내에서 이루어지므로 기존 설비에 영향을 주지 말아야 하며, 또한 그의 안전확보에 필요한 조치를 취해야 한다.

나. 공사에 투입되는 작업자는 우체국 업무에 지장을 초래하지 않아야 하며, 공사 수행상 불가피 하게 지장을 줄 경우에는 이를 최소화 하여야 한다.

다. 공사 시공 중 사고가 발생하였을 때에는 적절한 응급조치를 해야 하며, 동시에 감독원에게 통보하여야 한다. 또한 사고의 원인, 경과, 피해의 내용을 감독원에게 보고하여 그 지시를 받아야 한다.

라. 공사장 내 장애물은 감독원의 지시에 따라 제거한다.

마. 공사 준공 후 정돈 및 청소를 깨끗이 하여야 하며, 주변 및 기존 공작물의 변형, 손상부분은 준공 기간 내에 원상 복구하여야 한다.

바. 공사 시행 중 계약상대자의 부주의로 인해 화재, 안전 및 인명사고가 발생하는 경우 그에 대한 책임은 일체 계약상대자의 부담으로 처리하여야 한다.

9. 공사 준공후의 검사가 곤란한 부분에 대하여는 감독관의 지시에 따라 그의 형상 및 치수, 품질 등을 확인 할 수 있는 기록 및 기타 필요한 자료(검사 보고서, 사진 등)를 제출하여야 한다.

10. 환경오염방지

가. 계약자는 공사현장에 종사하는 모든 작업자에게 환경오염방지를 위한 교육을 실시하여야 한다.

나. 계약자는 공사현장의 환경오염방지에 관한 관계법령을 준수하여야 한다.

다. 공사중 발생되는 폐기물은 전문 폐기물 처리업체에 위탁하고 이에 대한 비용은 계약자 부담으로 한다.

11. 기타사항

공사 중 이견이 발생하였거나 시방서에 명기하지 않은 사항은 감독관과 협의하여 결정한다.